Příloha  č. 1

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo specifikované ve čl. II smlouvy ze dne 22.10.2003

Objednatel :
Městská část Praha 14
se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
zastoupená :  

SMP14,a.s. se sídlem Konzumní 640 Praha 9, PSČ 198 00

osoby oprávněné k podpisu smlouvy :
Ing. Karel Cekota, předseda představenstva
Ing. Eva Bažilová, místopředseda představenstva
IČ: 00231312                  
č. účtu : 49023-9800050998/6000 
na straně jedné

a

Zhotovitel:
Á

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změnách smlouvy takto: 

I.

čl. II se rozšiřuje o bod II. 2., který zní takto:

II. 2.  Zhotovitel se dále zavazuje :
         - přeřešit Studii stavby z hlediska požární bezpečnosti.
         - vypracovat zvláštní koordinaci řešení Dostavby holobytů Broumarská 25 s akcí TSK 
            „Broumarská, rekonstrukce komunikace“. 
         -zapracovat do čistopisu DUR řešení sedlových střech

II.

v článku  IV. v bodě  IV.1. se ruší znění písmen b) – e), které zní takto:

b) Dokumentace k územnímu řízení                                             do 31.05.2005
c) Dokumentace ke stavebnímu povolení                                     do 30.09.2005
d) Dokumentace pro provedení stavby                                         do 31.12.2005       
e) Podklady pro vyhledávání dodavatele stavby                          do 15.12.2005

III.

čl. V. se doplňuje o bod V. 3. který zní takto:

Za přepracování projektové dokumentace dle čl. II bod II.2. tohoto dodatku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu 125 000,--Kč bez DPH do 30ti dnů po předání dokumentace k územnímu řízení odboru výstavby Úřadu městské části Praha 14.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V.

Tento dodatek je platný podpisem stran a účinný dnem podpisu smluvních stran.

OBJEDNATEL :                                     dne ......................................

ZHOTOVITEL :                                      dne ......................................